＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노량진배수지 송수관로 누수복구에 따른 급수운영 일정변경 알림(긴급)

1. 남부수사업소(시설관리과) 요청 사항 관련 입니다.

2. 노량진배수지 송수관로(D2,200㎜) 누수복구 시행을 아래와 같이 변경 시행 하오니, 관련부서에서는 적극 소관사항 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 노량진배수지 송수관로 누수복구 시행에 따른 급수운영 추진계획

- 누수복구 변경 시행 일시

․당초 :  2018.5.23.(수) 10:00~ 5.24.(목) 12:00

․변경 :  2018.5.21.(월) 10:00~ 5.22.(화) 12:00

․변경사유 : 도로 균열로 공사일정을 당겨야 한다는 남부수도사업소 긴급 요청

- 누수복구 방법 : 강관 용접(D2,200㎜)

- 추진내용 : 누수복구 시행 전 관련 배수지 만수위 확보 후 비상 급수운영 시행 등

□ 부서별 소관 업무추진

○ 본부 배수과 : 누구복구 시 비상 급수운영 총괄

○ 본부 급수운영과 : 누수복구 시 배수지 수위 및 수질 모니터링

○ 본부 누수방지과 : 누수복구공사 시행 총괄

○ 본부 시설관리과 : 누수복구 대상관로 밸브 및 공기밸브 정비 총괄

○ 남부수도사업소

- 누수복구 공사 및 비상 급수운영 시행

․관련 배수지 만수위 확보(노량진, 대방, 상도, 상도3)

※ 누수복구 완료시 까지 관련 배수지 항 청소 연기

․봉현배수지 급수 공급체계 전환(상도, 장군봉 ⇒ 장군봉)

․노량진배수지 소수력 가동 중단 및 유입밸브 완개

․통수 시 노량진배수지 1개지를 비워 수질사고 대비

- 누수복구 시행 전 시설물 퇴수밸브 등 정비 : D2,200/700mm 2개소 등

․원불교 앞 매몰, 명수대아파트 108동 앞 작동 불량

- 누수복구 시 급수공급 중단관로(D2,200㎜) 공기밸브 정비

- 단수 및 통수 시 수계조절요원 확보(급수운영과 인력지원 등)

※ 신속한 밸브조절을 위한 인력 확보

- 단수 및 통수 시 수질검사 직원 배치

붙임 : 누수발생 및 복구계획 보고(남부수도사업소) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,누수방지과장,시설관리과장,남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김형식		배수과장	05/18 이용구
협조자
시행	배수과-4147	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	대시민공개