문서번호	도시철도사업부-4853
결재일자	2018.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
이덕배		권영민	05/18 박동룡
협조

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』

보조감리원(토목) 투입 승인 검토 보고

2018. 05.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』

보조감리원(토목) 투입 승인 검토 보고

신림선 도시철도 민간투자사업(1공구)에 대한 전면책임감리용역 수행 중 감리원 투입계획에 따라 상주 보조감리원(토목분야)을 투입 승인코자  검토 보고함.

※ 동부엔지니어링(발) 제2018-1125호(2018.05.18.)와 관련임.

□ 관련근거

○ 입찰안내서 제3장 기술용역계약 특수조건 제29조(감리원의 배치 및 교체)

○ 용역계약 감리원 투입계획서(2018.04.03.)

□ 계약현황

○ 계 약 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

○ 계약기간 : 총괄 ‘11.11.01.~ ’21.09.07.(제3차 : ‘18.04.06.~ ’19.05.19.)

○ 계약금액 : 총괄 2,745,120천원(기 준공 : 668,440천원, 제3차 : 652,000천원)

○ 계 약 자 : 동부엔지니어링(주) 외 2개사

□ 감리원 투입 승인 요청 현황

○ 감리원 투입계획 및 현황(총괄)

구 분		2016년			2017년					2018년			2019년			2020년					2021년			투입기간	투입여부
		09월			6월		12월			6월		12월	6월	12월		6월			12월		9월
토목	책임감리원 (수석감리사)																							'16.09.08 ~'21.09.07	투입완료
	보조감리원 (감리사)																							'16.09.12 ~'21.09.07	투입완료
	보조감리원 (감리사보)																							'17.07.10 ~'20.02.09	투입완료
	보조감리원 (감리사보)																							'18.06.01 ~'21.02.28	금회 투입예정
	보조감리원 (감리사보)																							'19.01.01 ~'20.10.10
건축	보조감리원 (감리사)																							'19.11.08 ~'21.09.07

○ 추가 투입 대상 보조감리원 현황

구 분	투입등급	투 입 예 정 자				투입시기
		성명	등급	경력	자격사항
보조감리원 (토목)	감리사보 (상주)	*** ***********	고급	*** ********	-	‘18.06.01.

○ 투입사유 : 토공 및 가시설공사가 진행 중이며, 터널공사가 본격 진행될 예정으로             계약된 투입계획에 따라 보조감리원 추가 투입 시기가 도래함.

□ 검토결과

○ 본 용역계약 감리원 투입계획에 따라 보조감리원 투입시기가 도래 하였으며,

- 보조감리원(토목) 추가 투입계획 : ‘18.06.01(보조감리원:감리사보)

- 현재 착수구간 흙막이벽 및 노면복공, 토공작업, 102E환기구 갱구부 보강 진행 중으로 터널공사 착수 예정에 따른 시공의 연관성을 위해 시공사의 야간·휴일작업 요청, 안전사고 예방 등 감리원 추가 배치 필요.

○ 투입 승인 요청한 보조감리원*****은 자격조건을 충족하여 적정함.

- 입찰안내서 제4장 2.2(과업수행 조직)에 따라 상주 보조감리원(감리사보)은 PQ 평가대상이 아님.

- 감리업무 수행을 위해 건설사업관리(고급), 기술자격 및 경력(17년) 등 자격요건을 충족하여 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치의견

○ 감리원 투입계획에 따라 추가 투입하는 상주 보조감리원(감리사보)은 자격       조건을 충족하여 감리원 배치계획(‘18.6.1.)을 승인코자 함.

붙임 1. 보조감리원 투입승인 요청 공문 1부.

2. 책임감리원 검토의견서 및 추가투입 감리원 이력 및 자격사항 각 1부.

3. 감리원 투입계획서.   끝.