문서번호	공공재생과-4905
결재일자	2018.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		서울역재생계획팀장	공공재생과장
김지호		정병익	05/18 홍선기
협조

손기정 기념 프로젝트 관련 손기정 체육공원 리뉴얼 기본계획 및 설계 용역 시행

2018. 5.

공공재생과

손기정 기념 프로젝트 관련

손기정 체육공원 리모델링 기본계획 및 설계 용역 시행

서울역 일대 도시재생사업 일환으로 추진 중인 손기정 기념 프로젝트와 관련하여 손기정 체육공원 리뉴얼 기본계획 및 설계 용역을 아래와 같이 시행하고자 함

Ⅰ		개요

□ 추진근거

□ 서울역 일대 도시재생활성화 계획 수립 고시( ‘17.12.28)

□ 서울역 일대 도시재생사업 관련 손기정 기념 프로젝트 실행 계획 변경 추진(공공재생과-3784, ‘18.4.17)

□ 대상지 현황

□ 위     치 : 손기정 체육공원(중구 만리동2가 6-1번지 일대)

□ 규     모 : 29,682.2㎡

□ 지정 현황 : 도시계획시설(공원) 결정(건교부 제469호, ‘87.9.18)

도시계획시설(공원) 조성계획 결정(서고시 제2006-345, ‘06.10.12)

□ 주요시설 : 손기정기념관, 문화 및 체육센터, 축구장, 테니스장, 주차장 등

Ⅱ		시행계획

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 손기정 기념 프로젝트

□ 사업기간 : 2017~2019년

□ 예    산 : 40억원(‘18년 30억원, ’19년 10억원)

- 공원내 러닝센터 및 대체공간 건축비 약20.1억원(설계비 1억원, 공사비19.1억원)

- 건축물을 제외한 공원내 각종 시설물 변경 및 공원조성계획변경 약19.9억원

(설계비 등 1.4억원, 공사비 18.5억원)

※ 소요비용은 향후 과업 진행과정에서 조정될 수 있음

□ 사업내용 : 공원 리뉴얼(러닝센터, 문화센터 대체공간, 트랙 등 조성)

공원 출입구 및 내․외부 안내표지판 설치 등

□ 용역발주방법

□ 용역명칭 : 손기정 체육공원 리뉴얼 기본계획 및 기본설계 용역

□ 용역기간 : 계약일로부터 120일까지

□ 과업범위 : 29,682.2㎡

□ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 소액(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호)

- 사유 : 서울역 일대 도시재생사업 관련 손기정 기념 프로젝트 실행계획 변경 추진(공공재생과-3784,  본부장 방침)

□ 소요예산 : 5,500만원(부가가치세 포함)

- 예산과목 : 공공재생계획 수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 서울역 일대 도시재생사업 추진, 시설비

□ 과업내용

- 공원 내 마라톤 트랙 등 시설물 변경 기본계획 및 설계

- 공원조성세부계획결정(변경)에 관한 사항

Ⅲ		향후계획

□ ‘18. 5.     기술용역타당성 심사, 계약 의뢰

□ ‘18. 5.     기본설계 용역 착수

□ ‘18. 8.     도시공원위원회 심의 상정

□ ‘18. 9.     기본설계용역 준공.

붙임 : 1) 추진 방침서 1부

2) 과업내용서 1부

3) 설계내역서 1부.  끝.