위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	창신숭인 도시재생기념관 전시설계 및 설치용역 계약변경 의뢰

1. 주거재생과-5752호(2018.5.17.)와 관련입니다.

2. ‘창신숭인 도시재생기념관 전시설계 및 설치용역’에 대하여 아래와 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 창신숭인 도시재생기념관 전시설계 및 설치용역

나. 용역기간 : 2017.12.11. ~ 2018.05.11.

다. 계약금액 : 금45,600,000원

라. 계 약 자 : ㈜디브이씨

마. 계약변경 내용

○ 과업기간

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘17.12.11 - ‘18. 5.11	‘17.12.11 - ‘18. 7.31

바. 변경사유 : 창신숭인 도시재생기념관 조성 공간인 창신1동 공동이용시설이 ‘18.6.30 완료예정으로 창신1동 공동이용시설 완공후 기념관 전시물설치기간을 고려하여 과업기간 연장

붙 임 : 1. 용역 설계변경 계획 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	주거재생과장
주무관	소석영		주거재생계획팀장	김승훈		주거재생과장	05/18 국승열
협조자	계약2팀장	이태영
시행	주거재생과-5811	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-7171	/전송	02-2133-0747	/	bballl92@seoul.go.kr	/	부분공개(6)