문서번호	시설과-2279
결재일자	2018.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김기수	이무림	김재균	05/21 이춘희
협 조
	재무팀장		김기중

남산공원 진입로 경관개선공사 추진계획

2018. 5.

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산공원 진입로 경관개선공사 추진계획

시민들이 즐겨찾는 남산공원의 노후된 공원입구 경관을 개선하여 불편사항을 해소하고 공원이용 활성화 및 만족도를 향상 하고자 함.

추진방향

○ 공원입구 노후된 주변 환경을 개선하여 공원이용 활성화

○ 시민참여사업으로 주민들의 의견을 반영한 공원진입 경관을 개선하여

공원이용 만족도 향상

사업개요

○ 공 사 명 : 남산공원 진입로 경관개선공사

○ 위    치 : 남산공원(중구 소공로3길 29-8일대)

○ 주요정비내용

- 시설물정비(목재데크 및 난간 109경간, 스틸그레이팅 35m, 안내판 3개)

- 수목식재(수수꽃다리 등 5종 2,450주)

○ 소요예산 : 금216,890,000원(도급비 134,640,850원, 관급자재비 82,249,150원)

○ 발주방법 : 일반공개입찰

○ 공사기간 : 2018. 6. 15. ~ 2018. 8. 30.

추진사항

○ 2018. 1. 10.          : 설계용역 타당성심사(市기술심사담당관)

○ 2018. 2.  5. ~ 2.  6. : 설계용역 계약 및 착공(신일에코텍(주))

○ 2018. 2. 12, 4. 20.    : 주민의견 수렴(회현동장 등)

○ 2018. 5.  9.          : 설계용역 준공검사

주요정비계획

□ 공원입구 진입로 경관개선(목재데크설치)

예산활용계획

○ 2018년 시설과 시설비 활용(시민참여예산)

- 남산공원 진입로 개선 공사비 : 230,000천원

○ 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원

보수정비사업, 남산공원 진입로 경관개선(시민참여), 시설비

향후계획

○ 2018. 5. 23. ~ 6. 13. : 예산배정(수시)요청, 공사발주 및 입찰공고

○ 2018. 6. 15. ~ 6. 20. : 공사계약 및 착공

○ 2018. 6. 20. ~ 8. 30. : 공사시행 및 준공

붙 임 : 설계도서 각1부.  끝.