문서번호	시설관리과-8945
결재일자	2018.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
최지영		05/21 代윤복철
협조

현장 실정보고에 따른 검토보고 (서초동1338-11 외 2 배수관정비공사)

2018. 5.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고에 따른 검토보고

『서초동 1338-11 외 2 배급수관정비공사』와 관련, 감독 시행하는 서울특별시 시설공단으로부터 현장 공사실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처-4749(2018.5.18)

1		공사현황

가. 공 사 명: 서초동 1338-11 외 2 배급수관 정비공사

나. 공사기간: 2018. 04.16. ~ 2018.12.23.

다. 공 사 비: 도급비 860,060,450원

라. 공사개요: 배수관부설 D=15~300mm, L=1,845m

밸브실 57개소

마. 도 급 자: 진흥공영(주) 대표 이기성

바. 감 독 청: 서울시시설공단(대리 이가람)

2		보고내용

상기 공사 진행중 도급사로부터 「진흥18-서초07호」에 대한 실정보고가 접수되어 검토 보고 합니다.

가. 실정보고 내용

구분	공종	개략공사비(천원,직접공사비)			비고
		당초	변경	증감
1	1구간 주간 공사 시행 반영	1구간 공사완료 후 추후 별도 산출(감)			협의율적용
2	익일재굴착 아스팔트 포장 깨기 반영	2,023	3,615	증1,592
3	횡단굴착 개소 증가 반영	1,228	3,520	증2,292
4	가정인입부 접합부속 (밸브소켓, 밸브)증가 반영	-	6,116	증6,116
5	공사안내현수막 설치 반영 및 안내간판 수량 증가 반영	-	911	증911
	소 계	3,251	14,162	증10,911

1) 1구간 작업시간 변경(야간→주간)

- 1구간(D200㎜, L754m)은 당초 야간 설계되었으나, 아스콘깨기 및 절단 작업시 발생하는 소음 민원으로 도로과에서 야간공사 중지 요청하여 방배경찰서, 현장 대리인 등과 협의하여 작업시간을 야간에서 주간으로 변경하고자 함

2) 익일재 굴착 아스팔트 깨기 및 토공 수량 증가

- 익일재 굴착 아스팔트 깨기(폐기물 포함) 및 토공이 설계 미반영되어 약20m(2m×10일) 수량 증가하고자 함

3) 횡단굴착 개소 추가

- 횡단굴착이 당초 2개소에서 정확한 지장물 확인을 위해 7개소 추가 시행 필요

4) 가정인입부 접속부속 증가

- 가정인입부 접합부속(밸브소켓, 게이트 밸브) 추가 반영

5) 공사안내 현수막 추가 설치

- 공사로 인한 상시 민원이 상당하여 공사 전 공사 안내 현수막을 추가 설치하여 사전 민원예방하고자 함

3		사업소 검토의견

가. 검토의견

1) 1구간 작업시간 변경(야간→주간)

- 1구간 작업시간 변경은 민원에 의한 건으로 주간 변경함이 타당하나,

- 도급사가 주장한 협의율 100%에 대해서는 「공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정 1.설계변경으로 인한 계약금액의 조정. 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우를 포함)에는 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하여 결정한다. 다만, 계약상대자간의 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.」와 관련하여 협의율을 당초 낙찰률인 86.748%로 조정 요청함

- 개략공사비: 1구간 공사 완료 후 별도 산출

2) 익일재 굴착 아스팔트 깨기 및 토공 수량 증가

- 관부설 공사시 연결부 작업을 위한 재굴착은 타당함

- 개략공사비: 증)1,592천원

3) 횡단굴착 개소 추가

- 정확한 지장물 확인을 위한 추가 굴착이 타당함

- 개략공사비: 증)2,292천원

4) 가정인입부 접속부속 증가

- 기존 보도쪽 인입부 접속부속 설치는 본관 부설이 도로쪽에 있어 접속부속 증가가 타당함

- 개략공사비: 증)6,116천원

5) 공사안내 현수막 추가 설치

- 민원예방에 효과적이므로 공사안내 현수막 추가는 타당함

- 개략공사비: 증)911천원

4		조치의견

가. 위 검토의견을 시설공단에 회신하여 향후 설계변경시 반영토록 하고자 함.

붙임: 개략공사비 증감 내역 각 1부.  끝.