＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고에 따른 검토 회신(서초동 배급수관정비공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-4749(2018.5.18.)호와 관련입니다.

2.「서초동 1338-11 외 2개소 배급수관정비공사」현장실정보고 제출 건에 대해 아래와 같이 검토 후 회신하오니 공사 시공에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 검토결과: 승인

나. 검토사항

연번	실정보고내용	회신내용	반영결과
1	주간공사 시행 반영	공단 실정보고 원안대로 반영 (단, 협의율은 낙찰률 86.748% 적용바람)	타당
2	익일재굴착 아스팔트 포장 깨기 반영	공단 실정보고 원안대로 반영	타당
3	횡단굴착 개소 증가 반영	공단 실정보고 원안대로 반영	타당
4	가정인입부 접속부속 증가 반영	공단 실정보고 원안대로 반영	타당
5	현수막 및 안내간판 증가 반영	공단 실정보고 원안대로 반영	타당

끝.

	강남수도사업소장
주무관	최지영		시설관리과장	05/21 代윤복철
협조자
시행	시설관리과-8991	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4892	/전송	3146-4939	/		/	부분공개(5)