문서번호	도로보수과-4698
결재일자	2018.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	05/23 김용제
협조

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

강서도로사업소

(도로보수과)

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(제1회)

우리사업소에서 시행중인『2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사』의 공종별 물량 증·감에 대한 설계변경 검토보고임.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 차선도색 및 제거 L=270,400m,
도로표지병 설치 및 제거 N=580개소

○ 공사기간 : 2018. 3. 8. ~ 2018. 12. 31.

○ 공 사 비 : 969,796천원

(도급비 653,296천원, 관급비 248,440천원, 이설비 68,060천원)

○ 도 급 자 : (주)세흥실업  대표 김덕자

Ⅱ		공사현황

○ 주요공종 변경 현황

연번	공 종	단위	수 량		비고(사유)
			당 초	변 경
1	차선(재)도색	m	244,000	252,000	현장여건변화에 따른 물량 변동
2	차선제거	m	26,400	26,400	변동없음
3	차로밑그림	m	30,440	30,440
4	도로표지병 설치	개소	380	380
5	도로표지병 제거	개소	200	200

○ 사업비 변경 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변경	증·감
총 공사비	969,796,550	969,796,550	-
도 급 비	653,296,550	656,370,000	증) 3,073,450원
관 급 비	248,440,000	230,111,000	감) 18,329,000원
이설비및기타	68,060,000	83,315,550	증) 15,255,550원

Ⅲ		조치계획

○ 현장여건 변화에 의한 공종별 물량 증·감 및 관급자재 물량 변경을 반영하여 위와 같이 설계변경을 시행 하고자 하며,

○ 관급자재 단가(계약금액) 변동에 의한 금액을 활용하여, 부족한 도급비 금액에 사용하고 잔여예산은 이설비로 활용하여 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임  1. 설계변경 내역서(제1회) 1부.

2. 관급자재 구매내역 및 원인행위 확정금액 1부.  끝.