투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(제1회) 시행(2018년 도로시설물 세척용역)

우리 사업소에서 시행중인 『2018년 도로시설물 세척용역』과 관련하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2018년 도로시설물 세척용역

나. 용역기간 : 2018. 3. 13 ~ 2018. 12. 31.

다. 도 급 자 : ㈜창성개발 대표 서창수

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	계	863,463,560	980,000,000	증)116,536,440
	공급가액	784,966,873	890,909,091	증)105,942,218
	부가가치세	78,496,687	89,090,909	증) 10,594,222

마. 설계변경 사유

- 봉산터널 개통(‘17.11월)으로 교통량이 증가하여 터널 내 잦은 오염발생에 따른 청소 요구 민원 해소를 위한 세척물량 증가

- 시설물 내부의 미세먼지와 차량 매연 등으로 인한 벽면의 찌든때 등 오염물질의 깨끗한 제거를 위한 일부 작업공종 변경(살수→인력)으로 현재까지 용역비 집행 대비 하반기 세척예산이 부족하여 우선 낙찰차액 반영

바. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 교량시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(▲116,536,440)

붙임 : 1. 설계변경(제1회) 검토보고서 1부.

2. 설계변경(제1회) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관							이동섭				주무관					권순회					시설보수과장					신동헌					서부도로사업소장						05/23 이학구
협조자				주무관							代최경아					관리단속과장							안근
시행			시설보수과-4086										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)