문서번호	방재시설부-6715
결재일자	2018.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이민영		진재섭	05/24 이임섭
협조
	경리과장		代김용범

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사-

준공기한연기 검토보고

2018. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사-

준공기한연기 검토보고

「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」감독기관(공단)이 제출한 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 준공기한 연기 검토보고서 제출(서울시설공단 공사감독1처-3091호 : ‘18.05.21.)

1		공사개요

□ 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

□ 공사내용 : 부지조성 6,142㎡(장비보관소, 사무실, 창고 설치)

□ 계약금액 : 금2,136,233,000원(금이십일억삼천육백이십삼만삼천원정)

□ 공사기간 : 2017. 09. 13. ~ 2018. 05. 31.

□ 시 공 사 : 우륭건설주식회사외 1(감독기관 : 서울시설공단)

2		검토내용

□ 준공기한 연기사유

- 남부도로사업소 추가작업 요청 : 염수교반장치 기초, 국기계양대 신설

- 우천으로 인한 아스콘 포장 준비작업 지연

- 관급자재(아스콘) 사전선정신청 부적합 통보에 따른 추가시험 소요

연번	현장여건에 따른 지연사유	지연일수	비고
1	남부도로사업소 추가작업 요청	16일
2	강우 및 아스콘 품질시험 재의뢰 관련 포장 지연	14일
	총지연일수	30일

□ 준공기한 연장

구분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2017. 09. 13. ~ 2018. 05. 31.	2017. 09. 13. ~ 2018. 06. 30.	증30일

□ 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

3		검토의견

□ 사용자측인 남부도로사업소에서 예비준공검사 당시 추가 설치 요청한 사항 반영 및 강우 및 관급자재(아스콘) 품질 관련한 포장 지연에 대한 소요기간 반영건으로 공단에서 제출한 준공기한 연기 검토 보고서 검토 결과『적정』하다고 사료됨.

4		조치계획

□ 상기와 같이 준공기한 연기를 승인조치하여 공사시행에 만전을 기하고, 계약부서(건설총괄부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 공단 공문 1부.

2. 공단 보고서 1부.

3. 준공기한 연기원 및 관련자료 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.