문서번호	설비부-6939
결재일자	2018.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
추한영		유병기	05/24 代유병기
협조

『중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2018.  5.

도시기반시설본부

설  비  부

『중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

“중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사” 와 관련하여 감리단으로부터 제출된 관급자재 납품기한 연기를 아래와 같이 검토보고 드림

공사개요

규    모 : 828,000㎥/일

- 총인처리시설 412,000㎥(T-P 0.13mg/L이하) - 비총인처리시설 416,000㎥(T-P 0.8mg/L이하)	⇒	혼합방류 T-P 0.46mg/L이하

주요설비 : 유입펌프, 총인설비, 슬러지설비, 건축설비, 소방설비 등

공사기간 : 2017.11.~2020.1.

도 급 비 : 2,299백만원(1차 775백만원)

시 공 사 : 영풍진흥기업(주)

관련근거

관급자재 납품기한 연기요청 검토보고(건설사업관리단,`18.5.10.)

검토내용

연기사유 : 공사시기 미도래로 납품기한 연기

납품기한 연기

계약번호 (납품요구번호)	품 명	금 액	납 품 기 한		비 고
			당 초	변 경
121718742200	체크밸브	78,891,000	`18.05.12.	`18.12.31.	증 233일
121718742400	버터플라이밸브	49,539,000	`18.05.12.	`18.12.31.	증 233일

귀책사유 : 도시기반시설본부

지체상금 : 미부과

조치의견

건설사업관리기술자 의견이 적정하다고 판단되므로 건설총괄부로 납품기한 연기 의뢰하고자 함

따로붙임 : 관련문서 1부. 끝.