투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	전기공사(1차) 변경계약 의뢰(남부도로사업소 청사 신축 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」에 대해 아래와 같이 변경계약(1차)을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부도로사업소 청사 신축 전기공사(1차)

나. 공사금액 : ********************************

다. 공사기간 : ’17.11.09.~ ’19.05.08.(1차, ’17.11.09.~’18.05.31.)

라. 시 공 사 : 성제전기㈜ 대표자 김팔성

마. 변경계약(1차1회) 의뢰 현황

구 분		당 초	변 경	증·감
총차	계약금액	금1***********5원	금1***********5원	-
	계약기간	’17.11.09.~’19.05.08.	’17.11.09.~’19.05.08.	-
1차	계약금액	금41********원	금41********원	-
	계약기간	’17.11.09.~’18.05.31.	’17.11.09.~’18.08.31.	증 92일

바. 변경사유 : 선행공사 지연에 따른 공사기간 연장 및 1차수 공사내용 조정

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 도로사업소                    청사신축, 시설비 및 부대비, 시설비(재배정)

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 변경내역서(1차수) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	박희정		열빛총괄과장	유병기		설비부장	05/24 代유병기
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-7015	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	pakei27@seoul.go.kr	/	대시민공개