문서번호	설비부-6997
결재일자	2018.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	05/24 代유병기
협조
	경리과장		代김용범

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사(장기_1차)』

공기연장 및 차수조정 검토 보고

2018. 05.

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사(장기 1차)』

공기연장 및 차수조정 검토 보고

「남부도로사업소 청사 신축 통신공사(1차)」 중 선행공사 지연으로

공기연장 및 차수조정 사항을 검토하고 보고드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남부도로사업소 청사 신축 통신공사(1차)

□  공사규모 : 통합배선 및 TV 설비, 전관방송 및 AV 설비, 주차관제 설비,

CCTV 설비, 비상벨 설비 등

□  계약금액 : 금492,710,120원(1차, 금45,000,000원)

□  공사기간 : ’17.11.03. ~ ’19.05.02.(1차, ’17.11.03.~’18.06.02.)

□ 도 급 자 : ㈜엔트립 대표자 최종국

□ 공 정 율 : 0%(※ 건축공정율 10%)

□  감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소(건설사업관리 책임기술자 한광섭)

2		검토근거

○ 삼우(도시기반) 제18-0523호, 통신공사(장기 1차) 공사기간 및 내역변경 요청

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준, 제13장 공사계약 일반조건

(제7절 계약금액의 조정, 4. 그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

3		검토내용

□  공기연장 및 차수조정 내용

구분	1 차 수		총 차
	공 사 기 간	계 약 금 액	공 사 기 간	계 약 금 액
당 초	17.11.03.~18.06.02.	45,000천원	17.11.03.~19.05.02.	492,710천원
변 경	17.11.03.~18.11.30.	45,000천원	17.11.03.~19.05.02.	492,710천원
증·감	증)181일	-	-	-

□  주요 변경 현황(1차수)

공 종	주 요 변 경 사 항	차수조정 금액(원)
		당 초	변 경	증()·감(△)
옥외통신설비공사	·옥외전선관 875m → 0m ·관로구방수 0개 →16개	26,403,478	1,038,646	△25,364,832
통합배선설비공사	·난연CD배관 617m ·아웃릿박스 35개, 정션박스14개		6,883,138	6,883,138
CATV설비공사	·난연CD배관 306m ·스위치박스 11개, 정션박스11개		2,572,010	2,572,010
방송설비공사	·난연CD배관 579m ·아웃릿박스 61개, 정션박스 9개	-	5,447,221	5,447,221
비상벨설비공사	·난연CD배관 423m ·스위치박스 37개	-	4,744,891	4,744,891
출입통제설비공사	·난연CD배관 236m ·풀박스 14개	-	2,808,908	2,808,908
CCTV설비공사	·난연CD배관 242m ·풀박스 21개		1,940,649	1,940,649
주차관제설비공사	·난연CD배관 75m ·아웃릿박스 4개, 풀박스 2개		845,307	845,307
가 설 공 사		1,107,982	1,107,982
제 경 비	부가세 포함	17,488,540	17,611,248	122,708
합 계		45,000,000	45,000,000	-

□  건설사업관리기술자 검토의견

○ 상기와 같이 「남부도로사업소 청사 신축 통신공사(장기-1차)」계약기간 및           내역 변경 요청을 검토한 결과, 통신공사 업체에서 요청한 통신공사(장기계약-1차)          변경은 적합한 것으로 사료됨 타당하다고 사료됨

4		조치의견

○ 상기 통신공사의 공기연장 및 1차수 조정 검토에 대한 건설사업관리기술자의          보고사항을 검토한 결과

○ 관련 법령에 적합하고 당해 건설사업의 건축공정을 고려하여 통신공사 1차수          조정사항 및 공기연장에 대해 건설총괄부에 계약의뢰하고자 함.

붙임  1. 감리검토보고 1부.

2. 변경내역서(1차수) 1부.

3. 예정공정표(총차, 1차) 각 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.