문서번호	급수운영과-10447
결재일자	2018.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	이경희	이성환	05/24 전영석
협 조
	기획예산과장		김형규
	행정지원과장		유정상
	주무관		서장원

계약심사 완료 및 공사시행 계획

(2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사)

2018. 5. 23.(수)

남부수도사업소

(급수운영과)

계약심사 결과 및 공사시행 계획

「2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사」에 대하여 본부(재무 회계과) 계약심사를 완료하고 심사결과에 따라 공사 시행코자 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사위치 : 청룡동, 은천동, 중앙동, 인헌동, 보라매동, 청림동, 성현동, 행운동, 낙성대동, 남현동

○ 공사개요 : D=20~300㎜  L=1,394m 상수도관 부설

○ 공사기한 : 착공일로부터 2019.06.30.일 까지

○ 총공사비 : 금1,031,500,000원

- 도    급    비 : 금761,500,000원

- 관    급    비 : 금120,000,000원

- 복구비  및 기타 : 금150,000,000원

○ 관련문서 : 「설계심사 결과 알림(2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사)」

‣ 본부 재무회계과-6764호(2018. 5. 21.)

□ 계약심사 결과내용

○ 계약심사 결과 금액                                         (단위 : 원)

구 분	계약심사 의뢰금액	심사결과금액	증 ․ 감
공급가액	707,400,000	692,272,000	-15,128,000
부가가치세	70,740,000	69,227,000	-1,513,000
도급비	778,140,000	761,500,000	16,640,000

○ 주요 심사 조정 내용 및 사유

- 단가 조정

ㆍ단수, 부단수천공 분기점 분기 : 공구손료 및 기계경비 수정

ㆍ제수밸브 부설 및 접합공 80~150㎜(인력) : 공구손표 및 잡재료비 수정

ㆍ살수 및 청소(야간) : 야간할증 누락 수정

ㆍ공구손료 조정 : 경비 → 재료비 적용

ㆍ콘테이너형 가설사무실, 창교 : 현장도착도 적용

ㆍ굴삭기(브레이커) 조합 잡재료비 조정 : 22% → 16%

ㆍ공기압축기 조정 : 건설기계운전사 → 일반기계운전사

ㆍ파쇄물운반(인력상차), 토사소운반(인력상차) : 인력상차비 조정

ㆍ나사조임식이음관접합 13~50㎜ : 기구손료 수정, 배관공 → 배관공(수도), 노임량 조정

- 수량 조정

ㆍ토공(되메우기, 파쇄물) 수량 조정

ㆍ환토재(사급) 수량 조정

ㆍ관급자재운반(보호통), 보호통설치 수량 일치

ㆍ적벽돌쌓기(2.0B) 삭제 : 사각밸브실 설치시 사용

- 제비율 조정

ㆍ건설하도급발급수수료 : 0.07% → 0.081%

ㆍ일반관리비 : 6 → 5.5%

□ 계약심사 결과검토

○ 심사결과에 대한 검토결과 : 이견 없음

- 현재 물가기준 등에 의거 자재단가가 반영된 사항이며, 내역서 및 일위대가 조정은 적정한 사항으로 위 심사결과를 반영하여 공사시행코자 함.

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조에의 상하수도 설비공사업 면허 소지자로 서울특별시에 주된 사무소가 있는 자

○ 발주금액 : 금1,031,500,000원 (도급비 761,500,000)

구 분	발주금액 (원)
총공사비	1,031,500,000
도급비	761,500,000
관급비	120,000,000
복구비및기타	150,000,000

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방용수시설등의설치 및 관리, 소방용수시설등의설치 및 보수

붙임  1. 계약심사 결과 공문 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.