투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행-사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

1. 시설보수과-4175(2018.5.25.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)』에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2016. 4. 12 ~ 2018. 5. 30. (2차:‘17.8.1 ~ ‘18.5.30)

다. 계 약 자 : 신안종합건설 대표 박순석

라. 설계변경 내역                                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 차	3,661,900,000	3,612,259,000	감) 49,641,000
2 차	1,897,900,000	1,848,259,000	감) 49,641,000

마. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 사천교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)

바. 설계변경 사유

- 감리단에서 기 공사 실정보고한 사항을 반영한 시공물량 증감(▼16,000,000)

- 4대보험료, 산업안전보건관리비, 환정보전비 등 제경비 정산(▼33,641,000)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고 방침서 1부.

2. 감리단 설계변경 보고서 1부

3. 설계변경내역서 1부.

4. 계약금액조정 제비율검증 확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

주무관							이동섭				주무관					권순회					시설보수과장					代권순회					서부도로사업소장						05/25 이학구
협조자				주무관							代최경아					관리단속과장							안근
시행			시설보수과-4196										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)