문서번호	건축부-7208
결재일자	2018.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
남광연		차무흥	05/25 임인구
협조

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』

지하옹벽 단차부 뒤채움콘크리트 타설 실정보고 검토보고

2018.  5.

도시기반시설본부

( 건 축 부 )

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』

지하 옹벽 단차부 뒤채움콘크리트 타설 실정보고 검토보고

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』관련 건설사업관리단으로부터 지하 옹벽 단차부 뒤채움콘크리트 타설 실정보고가 있어 검토보고함

1		사업개요

위    치 : 서울시 노원구 하계동 224-9 외 3

규    모 : 지하1층/지상3층, 연면적 3,299.76㎡ / 신축

공사기간 : 2017.11.16 ~ 2019.3.16.

시 공 사 : ㈜디에스종합건설 외 1개사

감 리 자 : ㈜신한종합건축사사무소

공 사 비 : **************

2		실정보고 내용

관련문서

- 실정보고(PIT 옹벽 단차부 무근콘크리트타설 실정보고 검토)승인 요청

신한시노청 제2018-65호(2018. 5. 10.)

관련규정

- 공사계약 일반조건 제19조 및 제19조의 2(설계서의 불분명,누락,오류 및 설계서 간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

실정보고 사유

- 당현장의 PIT 옹벽 단차부의 되메우기가 “무근 혹은 잡석 채움”으로 설계도면에 명시되어 있으나 수량산출서 및 내역서에 미반영되어 있음

실정보고 내용 및 공사비 증감

*********************

품명	규격	단위	당초		변경		증감액	비고
			수량	금액	수량	금액
*****
***	*******	*	**	*********	***	*********	*********
***
**************		*	*	***********	*	***********	*******
*****************		*	*	*************	*	*************	*********
**							**********

예산 조치

*******************************************

******************************************************************************************

3		건설사업관리단 검토의견

현장 여건상 덤프트럭, 굴삭기 등 장비진입이 어려우며, 잡석 다짐 불량에 의한 시공 하자가 발생할 우려가 있어 해당 구간에 무근콘크리트를 타설하는 것이 적절한 것으로 판단됨

PIT 옹벽 단차부 상세도면(S-206)상 무근 혹은 잡석채움으로 명기되었으나, 내역서에 미반영되어 있어 해당구간에 대한 무근콘크리트 타설 공사비에 대한 수량 산출 및 금액 재산정은 적정하다고 판단됨

4		처리의견

책임건설사업관리자의 검토 의견에 따라 실정보고건은 승인하여 우선 조치하고, 추후 관련절차에 의거 계약금액 조정시 시공물량을 확인 공사 도급비와 관급자재비를 조정하고자 함

붙 임 :  실정보고(PIT 옹벽 단차부 무근콘크리트타설 실정보고 검토) 검토 요청 1부.  끝.