문서번호	토목부-8985
결재일자	2018.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	代이한규	05/25 김영수
협 조

설계도서 변경 검토보고

(밤고개로 확장공사)

2018. 5.

도시기반시설본부

( 토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□	비공개(5조)
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

설계도서 변경 검토보고

(밤고개로 확장공사)

설계 도서의 미비점 검토 보완, 현장조사 및 유관기관 협의 요청에따른 공사물량 증·감이 발생하여 설계도서에 반영코자 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 밤 고개로 확장공사

○ 규    모 : 도로확장(6→ 7~8차로), L=1.85 km

○ 공사기간 : 2017.5.16. ~ 2018.12.30

○ 도 급 비 : 9,248백만원

○ 시 공 사 : 큰빛종합건설(주)

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링, ㈜삼안

□ 관련 근거

○ 토목부-10545(2017.5.24.), 업무지시

※ 하수관CCTV, 항공사진촬영

○ 토목부-11864(2017.6.9.), 실무회의 건의사항 검토결과 통보

※ 자전거 도로 설치

○ 도시기반시설본부-17-6088(2017.6.20.), 작업지시

○ 토목부-15854(2017.7.27.), 공사설계서 검토 요청

○ 도시기반시설본부-17-8436(2017.8.28.), 밤고개로 4차로 우선 확보 방안 제출 알림

○ 강남구 치수과-20428(2017.8.28.), 수서IC구간 하수관로 협의내용 알림

○ 서울지방경찰청 교통관리과-24225(2017.8.28.), 무인단속
카메라 이설 협의 내용 알림

○ 주차시설운영처-11257(2017.8.31.), 수서~밤고개로확장공사
관련 시설물 협의내용 조치요청

○ 도시기반시설본부-17-8750(2017.9.4.), 보행약자를 위한
편의시설 설치 민원 알림

○ 수도권매립지관리공사 매립관리처-2394(2017.9.6.), 토사 반입 불가 회신

○ 서울시 도로포장연구센터-2352(2017.9.6.), 도시기반시설본부
서울형포장설계법 계획단면(안) 결과 송부

○ 도시기반시설본부-17-8949(2017.9.8.), 보도정비 요청 사항 알림

○ 도시기반시설본부-17-11394(2017.11.28.), 수서공영주차장내
냉각파이프 이설협의 회신 알림

○ 토목부-25207(2017.12.1.), 밤고개로 확장공사 시담결과 보고

○ 토목부-25628(2017.12.6.), 밤고개로 확장공사 시담결과 보고(제2차)

○ 토목부-26041(2017.12.12.), 설계변경 단가협의 결과보고

□ 주요 변경내용

○ 토  공 : 흙깍기 104,000m3→21,290m3, 사토 108,488m3→17,952m3

○ 배수공 : 사각수로관  80m→465m, PC암거 80m→356m
선배수로관 0EA→677EA

○ 옹벽공 : 산석옹벽  1,345m2→1,733m2

○ 포장공 : 아스콘포장 8,824m2→48,062m2, 도로경계석 5,862m→8,818m

○ 교통안전시설공 : 디자인휀스 571m→2,192m 외

○ 부대공 : 암파쇄방호시설 302m, 버스정거장이전 7개소 외

○ 데크공 : 1식 추가 / 상수공 : 1식 제외 / 조경공 : 1식 추가

□ 공사비 검토

(단위:천원)

공 종	단위	공 사 비		증·△감
		당 초	변 경
1) 토 공		3,174,820	632,802	△2,542,018
2) 배수공		577,618	997,659	420,041
3) 옹벽공		437,900	504,559	66,659
4) 포장공	식	313,571	619,063	305,492
5) 교통안전시설공		404,921	1,225,865	820,944
6) 부대공		666,273	1,004,585	338,312
7) 데크공	식	-	166,415	166,415
8) 조경공	식	428,200	792,377	364,117
9) 상수도	식	431,527	-	△431,527
직접비 계	식	6,434,829	5,943,325	△491,504
간접비	식	2,751,272	2,625,497	△125,775
제잡비 제외공종	식	62,326	725,504	663,214
도급비	식	9,248,427	9,294,326	45,900
관급자재비	식	2,671,819	3,162,750	490,931
폐기물처리비	식	702,518	743,074	40,556
공사비	식	12,622,764	13,200,151	577,387

□ 감리단 검토의견

○ 상기 검토 내용과 같이 “밤고개로 확장공사” 실시 설계도서가 납품
되어 검토한 결과를 설계에 반영하고, 서울시 방침(보도환경개선과,
자전거정책과) 반영, 유관기관 협의(한국철도시설공단, 강남구청, 서울시 품질시험소, 동부도로사업소) 결과를 반영하여 공사진행을 원활하게 함이 타당하다 사료되며,

○ 신규비목에 대하여 표준시장단가(실적단가) 적용 항목은 ｢공사계약
일반조건｣ 제20조제③항을 적용하여 설계단가를 적용하고, 증가된 물량 또는 신규비목 단가는 설계변경당시를 기준단가로 2018년 상반기 노무비,품셈,도심지 할증을 적용하여 반영하고 발주처와 시공사간 주장하는 각각의 단가 협의가 이루어지지 아니하여 협의율을 적용하여 설계 변경시 반영하고,

○ 추후 설계변경시 실정보고 승인된 내용으로 반영하는 것이 적정하다 판단 됨.

□ 조치계획

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 설계도서 변경 내용을 승인코자하며,
추후 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨

- 개략도급비 : 증) 46백만원

○ 신규 공종의 단가적용은 시공사 대표, 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 ｢지방계약법 시행령｣ 제74조➃항제3호에 따라 협의율을 강제 적용코자 함

- 신규 및 물량증가 단가 : (100%+79.997%) / 2 = 89.998%적용

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.