투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(사천교 확장 및 성능개선공사)

1. 시설보수과-4196(2018.5.25.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)』에 대한 설계변경(정산) 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2016. 4. 12 ~ 2018. 5. 30. (2차:‘17.8.1 ~ ‘18.5.30)

다. 계 약 자 : 신안종합건설 대표 박순석

라. 설계변경 내역                                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 차	3,661,900,000	3,612,259,000	감) 49,641,000
2 차	1,897,900,000	1,848,259,000	감) 49,641,000

마. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 사천교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)

붙임 : 설계변경 관련서류 1식.  끝.

								시설보수과장
주무관							이동섭				주무관					권순회					시설보수과장					05/25 代권순회
협조자
시행			시설보수과-4199										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)