문서번호	시설보수과-4198
결재일자	2018.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		代권순회	05/25 이학구
협조

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

준공기한 연기 검토보고

2018. 5

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

준공기한 연기 검토보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 사천교 확장 및 성능개선공사의 준공처리 및 사후관리 등을 위하여 건설사업관리용역 준공기한 연기를 검토함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

○ 용역기간 : (총차) 2016. 4. 1 ~ 2018. 05. 30

(2차) 2017. 3. 1 ~ 2018. 05. 30

○ 계 약 자 : ㈜한국건설관리공사(60%) , ㈜대한콘설탄트(40%)

○ 계약금액 : (총차) 807,424,000원

(2차) 440,689,000원

□ 주요 추진경위

○ 2016. 4월 : 사천교 확장 및 성능개선공사 착공 및 감리용역 착수

○ 2017. 6월 : 교량 확장 완료

○ 2018. 5월 : 성능개선공사 완료(DB18→DB24)

□ 준공기한 연기 검토

○ 연기사유

- 현재 사천교 확장 및 성능개선공사의 주요 공종은 완료되었으며, 기존 교량 하부 구조물에 대한 일부 표면처리 마감작업을 수행중으로 ‘18.5.30 준공 예정이나,

- 감리용역의 준공기한이 ‘18.5.30로 동일하여 공사 준공검사와 관급자재 추가 설치분(휀스, 도막형바닥재)에 대한 시공관리 및 물품검수 등 원활한 후속처리를 위한 추가 사업관리 기간이 필요함.

- 추가 사업관리 기간은 기존 동절기(‘18.1~2월) 임시 공사 중지에 따른 감리단 인력투입 축소 운영을 통한 인건비 절감분을 반영하여 계약금 예산범위 내 조치

○ 준공기한 연기

- 당 초 : (총차) 2016.4.1. ~ 2018.5.30.

(2차) 2017.3.1. ~ 2018.5.30.

- 변 경 : (총차) 2016.4.1. ~ 2018.6.14. (15일 연장)

(2차) 2017.3.1. ~ 2018.6.14. (15일 연장)

○ 책임소재 : 발주처 귀책사유

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치의견

○ 상기 보고 내용과 같이, 사천교 확장 및 성능개선공사에 대한 사후관리의 원활한 처리 등 필요성에 따라 해당 건설사업관리용역의 준공기한을 연기 조치하고자 함.  끝.