투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	변경계약(남부도로사업소 제설 전진기지 전기공사 감리용역) 의뢰

우리 본부에서 시행 중인 「남부도로사업소 제설 전진기지 전기공사 감리용역」에 대해 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 남부도로사업소 제설 전진기지 전기공사 감리용역

나. 계약금액 : 금44,355,000원(금사천사백삼십오만오천원)

다. 용역기간 : 2017. 09. 27. ~ 2018. 05. 31.

라. 감 리 사 : ㈜한양케이앤이 대표자 김홍인

마. 변경계약 의뢰 현황

구 분	당 초	변 경	증·감
계약금액	금44,355,000원	금44,355,000원	-
계약기간	’17.09.27.~’18.05.31.	’17.09.27.~’18.06.30.	증 30일

바. 변경사유 : 전기공사 준공기한 연장에 따른 감리용역 기간 연장

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선(도시 개발),

도로사업소 청사 신축, 시설비 및 부대비, 감리비(재배정)

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	박희정		열빛총괄과장	유병기		설비부장	05/25 代유병기
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-7094	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	pakei27@seoul.go.kr	/	대시민공개