투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기 의뢰(남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건축사 감리용역)

우리부에서 추진중에 있는「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건축사 감리용역」에 대하여 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건축사 감리용역

2. 용 역 비 : 16,000,000원(일천육백만원)

3. 용역기간 : 2017.09.27.~2018.05.31

4. 용역업체 : 하스종합건축사사무소 대표 한세전

5. 예산과목 : 안전총괄본부 도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선(도시개발), 도로사업소 청사신축, 시설비 및 부대비, 감리비

6. 준공기한 연기 (※계약금액 변경 없음)

대 상	공기연장 요청현황			비고
	당초	변경	증·감
남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건축사 감리용역	‘17.09.27 ~’18.05.31	‘17.09.27 ~’18.06.30	증30일

7. 연기사유 : 붙임 참조

붙임 :  1. 용역연기 검토 보고서 1부.

2. 감리용역 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	이민영		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	05/25 이임섭
협조자
시행	방재시설부-6780	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	min02@seoul.go.kr	/	부분공개(5)