문서번호	교량안전과-9152
결재일자	2018.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김태형		정회평	05/25 代박동욱
협조

신정교 접속교 외 4개소 실시설계 용역 준공기한 연기 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

안전총괄본부

(교량안전과)

신정교 접속교 외 4개소 실시설계 용역 준공기한 연기 검토

우리과에서 시행중인『신정교 접속교외 4개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계 용역』의 준공기한 연기를 위한 검토 보고임.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 신정교 접속교외 4개소 내진성능평가 및 내진보강공사                 실시설계 용역

□ 용역기간 : ’18.01.15. ~ ’18.05.30

□ 도 급 비 : 137,890천원

□ 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		그 간 추진사항

□ ’17.12.19 : 실시설계용역 발주

□ ’18.01.09 : 용역계약

□ ’18.01.30 : 착수보고

□ ’18.03.16 : 중간보고 및 1차 자문회의

□ ’18.03.29 : 최종보고 및 2차 자문회의

□ ’18.04.17 : 특정제품(공법)선정심의

□ ’18.05.15 : 설계변경을 위한 국토부 질의

- “내진성능 평가 및 내진보강 방안제기를 위한 필요비용”에 현장조사        비용이 포함된 인원구성인지 여부(『시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시등에 관한 지침』)

Ⅲ		준공기한 연기 검토

□ 연기 내용

당 초	변 경
’18.01.15.∼’18.05.30	’18.01.15.∼’18.06.30

□ 연기 사유

- “내진성능 평가 및 내진보강 방안제시를 위한 필요비용” 관련 국토부 질의(05.15)회신 및 후속조치에 따른 절대공기 부족 등

※ `18.06.05 통보 예정

□ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		행 정 사 항

□ 재무과 통보하여 준공기한 연기 처리

□ 용역설계는 완료된 상태이며, 국토부 회신결과에 의거 조속히     설계변경 및 준공처리.

붙임 : 합의각서 및 예정공정표 1부. 끝.