문서번호	방재시설부-6753
결재일자	2018.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이민영		진재섭	05/25 이임섭
협 조
	경리과장			代김용범
	복지시설과장			조영수
	주무관			권기용

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사-  건축 감리용역연기 검토보고

2018. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사-  건축 감리용역연기 검토보고

「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」준공기한 연장에 따른 건축 감리용역 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

※ 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 준공기한 연기 검토보고(방재시설부-6715호 : ‘18.05.24.)

1		용역개요

□ 용 역 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건축사 건축감리용역

□ 계약금액 : 금16,000,000원(금일천육백만원정)

□ 계약기간 : 2017. 09. 27. ~ 2018. 05. 31.

□ 계 약 자 : 하스종합건축사사무소 대표 한세전

2		검토내용

□ 준공기한 연기사유

- 본 공사인「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」가 남부도로사업소 추가 작업 요청 및 우천으로 인한 아스콘 포장 준비작업 지연 등으로 준공기한 연기

□ 준공기한 연장

구분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2017. 09. 27. ~ 2018. 05. 31.	2017. 09. 27. ~ 2018. 06. 30.	증30일

□ 연기에 따른 귀책소재 : 발주청

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

3		검토의견

□ 사용자측인 남부도로사업소에서 예비준공검사 당시 추가요청한 사항 반영 및 강우와 관급자재(아스콘) 품질관련한 포장 지연에 따른 실착공 지연 등의 사유로 본공사가 준공연기 된 사항으로 감리용역의 준공기한 연기가 필요함.

4		조치계획

□ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고, 계약부서(건설총괄부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 준공연기 방침 1부.

2. 감리용역 준공기한 연기원 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.