투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역)

1. 시설보수과-4198(2018.5.25)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 있는 「사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역」관련다음과 같이 준공기한을 연기코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

나. 준공기한 연기내역

- 당 초 : (총차) 2016. 04. 01. ~ 2018. 05. 30.

(2차)  2017. 03. 01. ~ 2018. 05. 30.

- 변 경 : (총차) 2016. 04. 01. ~ 2018. 6. 14.

(2차)  2017. 03. 01. ~ 2018. 6. 14.

다. 책임소재 : 발주처 귀책사유

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 준공기한 연기사유

- 본 공사의 준공계 접수(‘18.5.30) 및 준공검사와 추후 일부 관급자재 추가 설치분에 대한 시공관리 및 물품검수 등 원활한 후속처리를 위한 사업관리 기간 연장

※ 준공기한 연기로 인한 인건비 추가분은 동절기(‘18.1~2월) 감리단 인력투입 축소 운영에 따른 인건비 절감분을 반영하여 계약금액 예산범위 내 조치

붙  임 :  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이동섭		주무관	권순회		시설보수과장	05/28 신동헌
협조자
시행	시설보수과-4208	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	부분공개(7)