위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강사업 사업계획 조정 제출

1. 귀 공사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도심지 고가구간 열차 운행시 발생하는 소음 저감 및 도시미관 제고 일환으로 ‘11년부터 시행하고 있는 『지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강사업』과 관련입니다.

3. 위 사업에 대하여 연차별 사업계획에 의하여 추진하고 있으나, 고가 작업 특성과 각종 민원에 따른 공기연장, 내진보강사업 추진에 따른 인력부족 등 대·내외적 여건 변화로 사업추진이 매우 지연(2~3년 이상)되고 있는 실정입니다..

4. 따라서 연차별 사업계획과 ‘18년 사업비(예산 미 집행에 따른 삭감)를 조정할려고 하니 『지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강사업』에 대한 사업계획을 조정하여 제출하시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이성열		도시철도안전팀장	김재창		교통정책과장	05/29 구종원
협조자
시행	교통정책과-13932	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 7층 (서소문동)	/
전화	02-2133-4162	/전송	02-2133-1048	/	san730@seoul.go.kr	/	대시민공개