투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
(경유)
제목	공사 준공기한 연기 알림[남부도로사업소 제설전진기지 조성공사]

1.「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」관련입니다.

2. 예비준공검사시 사용자측인 남부도로사업소 추가 요청한 사항(염수교반장치 기초 설치, 국기계양대 신설) 반영 및 강우에 의한 부지내 아스콘 포장 지연 등의 사유로, 해당 공사의 준공기한이 2018.06.30일까지 연기되었음을 알려드립니다.

3. 아울러, 준공후 시설물에 대한 인수인계가 바로 추진 될 수 있도록 협조하여 주시기바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이민영		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	05/29 이임섭
협조자
시행	방재시설부-6914	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	min02@seoul.go.kr	/	대시민공개