문서번호	배수과-4299
결재일자	2018.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
권오정		이용구	05/29 이규상
협조

노후 송배수관 정비 담당자 회의 결과 보고

2018. 5

급수부(배수과)

노후 송배수관 정비 담당자 회의 결과 보고

노후 송배수관 정비 사업 추진 및 비굴착 갱생공법 사후 평가에 따른 담당 주무관 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의개요

○ 일    시 : 2018.5.24(목)

○ 장    소 : 급수부 회의실

○ 참석현황

- 상수도본부 : 배수과장, 업무담당

- 사  업  소 : 중부 양봉우, 서부 양재덕, 동부 이훈재, 북부 김재영강서 주은선, 남부 이 철, 강남 제영도, 강동 양봉우

2		회의 안건

○ 노후 송배수관 정비 사업소별 목표달성 계획

- ’18년 목표 : 25㎞ (사업비 594억원)

○ 무단수 급수체계 구축 사업 추진 현황 : 14개 블록 정비

○ 비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가계획

- 비굴착 갱생공법 사후 평가 효율적인 시행방법 검토

- 비굴착 갱생공법 사후 평가 시행에 따른 애로사항

3		회의 결과

○ 노후 송배수관 정비공사 사업소별 목표달성 추진 철저

- 400㎜ 이상 노후 송배수관은 2019년까지 완료하여야 하며, CIP관은 완전 정비

- 관급자재비 구매, 공사비 선금지급(70%)을 적극 활용하여 예산 신속 집행

- 교통처리용역 시행시 실제 점용면적으로 심의

- 다른 용도로 송배수관 정비예산 사용 못하도록 관리

○ 무단수 급수체계 구축 사업추진

- 단가계약공사로 시행하는 구간에 대해서 실적 관리 철저

- 중블록 분할 및 정비내용에 대해 GIS입력 등 사후 관리 철저

※ 사업소별 무단수 급수체계 구축사업 별도 도면관리 시행

○ 비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가 시행

- 사업소별 비굴착 갱생공법 점검개소에 대한 현장조사 및 평가시행 철저

⇒ 점검개소 : 28개 공사 (사업소별 3~5건)

- 실제적인 점검이 될 수 있도록 CCTV, 사진촬영 등 시행하고 평가완료 보고시 포함하여 제출

	<사업소 의견>
□ 중부 : 비굴착 갱생공법 사후 평가 구간은 많은 수계전환 및 단수발생, 작업구가 없는 구간이 많아 점검대상 축소 필요 □ 강남 : 시공업체에서 선금보증보험, 사용실적 보고 등으로 선금 지급 기피 □ 서부 : 무단수 급수체계 구축 By-pass연결 구간이 간선도로로 많은 교통량 때문에 지연

4		향후 계획

○ 비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가 결과 보고(사업소) : ’18.9.14

붙임 : 사업소 참석자 현황 1부.  끝.