위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	(주)시아플랜건축사사무소 대표 조주환
(경유)
제목	설계용역 조속완료 요청

1. 공공재생과-2604(2018.3.16.)호와 관련입니다.

2.「남산 예장자락 재생사업 기본 및 실시설계용역」은 2016.4.8.일 계약되어 2018. 2.8. 준공예정이었으나, 측량 및 설계도서 오류 등의 사유로 설계과업의 완료가 늦어져, 지연배상금이 부과되고 있는 실정입니다.

3. 또한, 설계도서 보완의 장기화로 공사추진이 원활하지 않을 뿐만 아니라, 소방재난본부 구내식당 폐쇄관련 건으로 월 16,000,000원 가량의 예산이 지속 투입되고 있으며, 사업 준공시기가 계속 미뤄짐에 따라 우리시의 행정신뢰도 실추, 조성지연에 대한 기회비용 발생 등 간접적인 우리시 손실도 우려되는 상황입니다.

4. 따라서, 귀 설계사의 역량을 집중하여 본 용역의 완료에 최선을 다해 주실 것을 간곡히 당부드립니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배현경		특화공간조성팀장	유봉모		공공재생과장	05/29 홍선기
협조자
시행	공공재생과-5145	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8705	/전송	2133-0885	/	xodiddls@seoul.go.kr	/	대시민공개