＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	관급자재 변경 구매(낙산배수지 건설공사)

1. 시설과-1788(2018. 2. 27.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인『낙산배수지 건설공사』의 관급자재 납품수량이 변동되어 아래와 같이 변경하고자 합니다

가. 건    명 : 낙산배수지 건설공사 관급자재 변경 구매

나. 품    명 : 레미콘

다. 변경현황

1) 납품기한 : 변경없음(2018. 12. 31.)

2) 변경사유 : 당초 배정된 업체 협의결과 1일 최대 타설량 납품 불가로 인한 물량 변경

3) 계약수량

(단위:㎥)

G2B 분류번호	G2B 식별번호	규격	수 량		증 ․ 감
			당 초	변 경
30111505	10063105	레미콘, 25-27-120	897	379	518(감)
30111505	10063091	레미콘, 25-18-120	458	233	225(감)
30111505	10063096	레미콘, 25-21-120	60	60	증·감없음

4) 소요예산

- 당 초 : 금 96,861,330원(금구천육백팔십육만일천삼백삼십원)

- 변 경 : 금 45,674,810원(금사천오백육십칠만사천팔백일십원)

5) 예산과목

- 당초

· 자본적지출,비가동설비자산취득,건설중인자산,시설비및부대비(시설비)-(물품대:96,341,090원)

· 자본적지출,비가동설비자산취득,건설중인자산,시설비및부대비(시설부대비)-(조달수수료:520,240원)

- 변경

· 자본적지출,비가동설비자산취득,건설중인자산,시설비및부대비(시설비)-(물품대:45,429,490원)

· 자본적지출,비가동설비자산취득,건설중인자산,시설비및부대비(시설부대비)-(조달수수료:245,320원).  끝

주무관	차승현		시설과장	송병욱		시설안전부장	05/30 강신재
협조자	주무관	윤걸		주무관	이흥재		주무관	안희숙
재무회계과장	박병식
시행	시설과-5119	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)서울시 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1496	/전송	02-3146-1529	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개