투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재(전동기제어반) 납품기한 연기 요청

1. 총무과-4199(2018.4.27.)호와 관련입니다.

2. 「동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사」에 소요되는 관급자재인 전동기제어반에 대한 납품기한을 아래와 같이 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사-전동기제어반

나. 전동기제어반 납품기한 연기 내역

물품식별 번 호	품 명	규 격	계약 수량	단위	금 액(원) (수수료 미포함)	납품기한변경		비 고
						변경전	변경후
********	전동기제어반	75kW	1	면	**********	2018.6.15.	2018.7.20.	*********
********	분전반	400AF	1	면	*********	2018.6.15.	2018.7.20.	*********

다. 연기사유 : 공정 추진상 시기 미도래.  끝.

	시설과장
주무관	허용석		주무관	이춘한		시설과장	05/30 오임석
협조자
시행	시설과-3223	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7437	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)