문서번호	기전과-4974
결재일자	2018.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
정영술		05/30 양영민
협조

준공기한 연기 검토보고

(자전거도로 구축관련 교통안전표지 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  5.

서부도로사업소

(기전과)

준공기한 연기 검토보고

(자전거도로 구축관련 교통안전표지 설치 공사)

「자전거도로 교통안전표지 설치공사」와 관련 선행공정인 토목공사 진행 지연으로 공사기간이 부족하여 준공기한을 연기코자 함.

□ 관련문서

○ 마포구 교통행정과-25613호(2018. 5. 17.) 및 중구 교통행정과-35388

(2018. 5. 17.)호와 관련 공사 일정 변경 알림

□ 공사내역

○ 공사명: 자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사(서강로)

- 공사 위치: 서강로(서강대교 북단~신촌로타리)

- 공사 내용: 교통안전표지 설치 1식

- 계약 금액: 금23,223,810원

- 계약 업체: 예건디자인(주) 대표 김규식

- 공사 기간: 2017. 12. 14.~2018. 6. 11.

○ 공사명: 자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사(서소문로,청파로)

- 공사 위치: 서소문로(경찰청교차로~상수도사업본부교차로), 청파로(상수도

사업본부교차로~서울역서부교차로)

- 공사 내용: 교통안전표지 설치 1식

- 계약 금액: 금8,062,170원

- 계약 업체: ㈜티엔지건설 대표 임준기

- 공사 기간: 2017. 12. 14.~2018. 6. 11.

□ 검토(보고) 내용

○ 검토 사항: 자전거도로 구축 사업 관련 「자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사」에 대하여 준공기한 연기 검토

- 연기사유: 선행공정인 토목공사 지연으로 공사기간 부족

- 귀책 소재: 서부도로사업소

- 지체 상금: 미부과

○ 공사기간

- 당초: 2017. 12. 14.~2018. 6. 11.

- 변경: 2017. 12. 14.~2018. 11. 30.

□ 예산과목: 교통사업특별회계, 자전거정책과, 자전거이용시설 확충 및 관리, 도심연결자전거도로망 구축, 시설비

□ 조치의견

○ 선행공사인 토목공사 지연에 따라 공사기간이 부족하여 교통안전표지 공사에 대해 2018. 11. 30. 까지 준공기한 연기 조치

- 관리단속과에 준공기한 연기의뢰하여 변경계약 체결

첨부  관련공문 2부. 끝.