문서번호	시설관리과-9495
결재일자	2018.5.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
최지영		05/30 박은선
협조

현장 실정에 따른 검토 보고 (서초동1338-11 외 2 배수관정비공사)

2018. 5.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정에 따른 검토보고

『서초동 1338-11 외 2개소 배급수관정비공사』와 관련, 감독 시행하는 서울특별시 시설공단으로부터 단수작업계획서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처-5222(2018.5.25)

1		공사현황

가. 공 사 명: 서초동 1338-11 외 2개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간: 2018. 04.16. ~ 2018.12.23.

다. 공 사 비: 도급비 금860,060,450원

라. 공사개요: 배수관부설 D=15~300mm, L=1,845m, 밸브실 57개소

마. 도 급 자: 진흥공영(주) 대표 이기성

바. 감 독 청: 서울시시설공단(대리 이가람)

2		보고내용

상기 공사의 단수계획서를 검토하고 보고합니다.

가. 실정보고 내용

1) 1구간 연결공사 단수작업시 실정보고

- 기존 상수도 배관과 신규 부설 배관과의 시･종점 연결공사를 위해 단수작업계획이 공단으로부터 접수되어 이를 검토 중

- 1구간은 단수범위가 광범위(주변학교 포함 약1,000여 세대)하고

- 방배가압지역으로 자연수계와 가압수계 구분을 위한 경계밸브로 실제 물의 흐름이 일방향으로 수계가 불안정한 실정임

- 또한 단수로 인한 적수 발생시 주변 세대가 대부분 주거지역으로 민원 발생이 우려되는 실정임

3		사업소 검토의견

가. 검토의견

1) 1구간 연결공사 작업 방법 변경(단수→부단수)

- 1구간 시･종점 기존관과 신설 부설관(D200㎜ 754m)간 연결공사 작업은 단수범위가 광범위(학교 및 주택가 등)하고,

- 방배가압구역 내 경계밸브 폐쇄상태로 수계가 불안정(일방향 물 흐름)하여 공사로 인한 단수작업시 적수발생등의 우려가 있는 실정임

- 이처럼 단수로 인한 문제점을 해결하고자 부단수 라인스토핑 시공으로 작업 방법을 변경하고자 함

2) 방배가압지역 및 종점부 단수구역도

방배가압지역	종점부 단수구역도

3) 예상 공사비

- 개략공사비: 증)23,000천원

4		조치의견

가. 위 검토의견을 시설공단에 회신하여 향후 설계변경시 반영토록 하고자 함.  끝.