문서번호	도로보수과-2903
결재일자	2018.5.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도로보수과장
박해웅	05/30 김유찬
협 조	주무관		송광석
	주무관		이석연

양재대로 방이역 주변 자전거도로 정비 계획

2018. 5.

동부도로사업소

(도로보수과)

양재대로 방이역 주변 자전거도로 정비 계획

『2018년 굴착복구 시행도로정비공사』추진중 포장정비 대상 구간 내 자전거 전용도로 포장파손에 따른 추가 정비계획을 수립하여 보고드림

	1		관련 근거

❍ 양재대로 방이역 주변 자전거도로 주변 측구정비  등 요청

- 도로보수과-2257(2018.04.24.)호, 2490(2018.05.08.)호

❍ 양재대로 방이역 주변 자전거도로 주변 측구정비 요청 회신

- 송파구 도로과-11184(2018.05.11.)호, 치수과-6187(2018.05.14.)호

❍ 양재대로 방이역주변 도로측구정비 예산반영 관련 의견 회신

- 서울시 자전거정책과-5526(2018.05.29.)호

	2		공사 개요

❍ 공 사 명 : 2018년 굴착복구 시행도로 정비공사(연간단가)

❍ 계약상대자 : 만석공영(주) 대표 윤정숙

❍ 계약금액 : 238백만원

❍ 계약일자 : 2018. 3. 23.

❍ 공사기간 : 2018. 3. 29. ~ 2018. 9. 30.

	3		자전거도로 정비 추진 개요

❍ 포장도로 정비 구간내 자전거도로 및 측구 침하로 안전사고 발생이 우려되어 자전거도로 정비가 시급한 실정으로

- 위치 : 양재대로 방이역 주변 양방향(L=455m)

- 현황 : 측구 10cm내외 침하로 자전거도로 포장면의 크랙 및 급경사 발생

❍ 자전거도로 정비 전 측구 정비(인상)가 필요하여 송파구 및 자전거정책과와 협의한 결과 예산부족 등의 사유로 금년도에 측구 정비가 불투명함

- 송파구 : 측구정비를 위해서는 측구와 보차도경계석 및 보도포장을 병행 정비하여야하나 현재 확보된 예산으로 정비가 어려우니 사업소 자체정비 요청

- 자전거정책과 : 측구 관리부서와 협의하여 정비

	4		문제점 및 해경방안

❍ 문 제 점 : 현 시점에서 자전거도로를 정비하지 않고 방치할 경우 민원 및 안전사고 발생이 우려됨

❍ 해결방안 : 시행도로 정비공사 시행 시 병행정비 추진

- 정비방법 : 자전거도로 경계석을 철거 후 본선 포장과 병행하여 자전거도로 포장을 정비하고 측구는 우리 사업소에서 아스콘으로 임시포장 인상조치 후 송파구에서 향후 정비토록 통보

ㆍ장점 : 포장공사 병행시공으로 예산절감, 기계화시공으로 포장 평탄성 및 품질 제고

ㆍ단점 : 측구 아스콘포장으로 미관 저해, 향후 측구정비 시 폐기물처리비 추가 소요

	5		조치의견

❍ 사안의 시급성을 감안하여 크랙 및 침하 구간 자전거도로를 아래와 같이 우선 정비하고 향후 설계변경시 정산처리

공 종 별	공사개요	공사시행	소요예산	예산과목
계			35,000천원
포장공사	포장정비 6.3a	2018 시행도로 정비공사	28,100천원	자전거정책과 자전거도로안전시설확충, 시설비
폐기물처리	폐콘크리트 처리 40톤	2018 불량맨홀정비공사 폐기물처리용역	1,900천원
노면표시 도색공사	차선도색 900m 문자기호 1식	2018 긴급,굴착 노면표시 도색공사	5,000천원	굴착복구공사, 시설비

붙임 : 1. 자전거도로 정비대상 위치도, 사진, 개략 도면 각 1부.

2. 자전거도로정비 개략 설계내역서 1부.

3. 관련공문서(별도붙임) 각 1부.  끝.