투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	시설공사 설계변경 계약 의뢰(초안산 보행교량-전체6회, 3차 2회)

우리본부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』에 대해 아래와 같이 설계변경(전체6회, 3차2회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

나. 도 급 비 : 8,084,230천원(3차:3,444,108천원)

다. 공사기간 : ‘16.04.29.∼’18.11.30.(3차: ‘18.1.22~11.30)

라. 도 급 자 : ㈜한양산업개발

마. 예산과목

- 일반회계, 치수 및 하천관리, 하천 복원 및 정비, 중랑천 초안산 앞

보행교량 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경(전체6회, 3차 2회)                             (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. △감
전 체 (6회)	도 급 액	8,084,230	8,813,288	증) 729,058
	공사기간	2016.04.29. ~ 2018.11.30.	2016.04.29. ~ 2018.11.30.	-
3 차 (2회)	도 급 액	3,444,108	4,173,166	증) 729,058
	공사기간	2018.01.22. ~ 2018.11.30.	2018.01.22. ~ 2018.11.30.	-

사. 설계변경 사유

- 공사중 발생한 실정보고 사항 반영

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경 내역서(6회 및 3차2회) 및 합의각서 등 각 1부.   끝.

	토목부장
주무관	노순재		교량건설과장	代김동현		토목부장	05/30 김영수
협조자
시행	토목부-9348	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	fortuners@seoul.go.kr	/	대시민공개