투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치공사 실시설계 용역

1. 시설관리과-1321(2018.5.25.)호와 관련입니다.

2.「한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치공사 실시설계 용역」건에 대하여 다음과       같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치공사 실시설계 용역
계약상대자	㈜진우엔지니어링코리아 (대표 : 김명철)
계 약 금 액	금79,969,000원(금칠천구백구십육만구천원)
계 약 일 자	2018.02.28.
용 역 기 간	2018.02.28. ~ 2018.05.28.

나. 변경내역 : 기간 변경(2018.02.28. ~ 2018.09.28.)

변 경 내 역	변경전	변경후
기 간 변 경	2018.02.28. ~ 2018.05.28.	2018.02.28. ~2018.09.28.

다. 변경사유 :  도시 디자인 위원회 심의 결과 조치, 국토관리청 하천점용 허가                        등 관련기관 협의 기간 추가 소요.

붙   임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 변경계약보증서 1부.

3. 계약의뢰 1부.  끝.

4. 용역 계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	05/30 代박병현
협조자
시행	총무과-7263	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)