투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사 준공기한 연기의뢰

자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사와 관련 공사기간을 연기코자 하니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 준공기한 연기대상 사업

○ 자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사(서소문로, 청파로)

- 계약자: 예건디자인(주) 대표 김규식

- 계약 금액: 금23,223,810원

- 공사 기간: 2017. 12. 14.~2018. 6. 11.

○ 자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사(서소문로, 청파로)

- 계약자: ㈜티엔지건설 대표 임준기

- 계약 금액: 금8,062,170원

- 공사 기간: 2017. 12. 14.~2018. 6. 11.

2. 공사기간

- 변경 전: 2017. 12. 14.~2018. 6. 11.

- 변경 후: 2017. 12. 14.~2018. 11. 30.

3. 연기 사유: 선행공정인 토목공사 지연으로 공사기간 부족

4. 귀책 사유: 서울특별시(서부도로사업소)

5. 지체상금 부과여부: 미부과

6. 예산 과목: 교통사업특별회계, 자전거정책과, 자전거이용시설 확충 및 관리, 도심연결자전거도로망 구축, 시설비

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 2부.  끝

	기전과장
주무관	정영술		기전과장	05/30 양영민
협조자	주무관	代최경아		관리단속과장	안근
시행	기전과-4975	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개