투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제 목	시설비 사업 추진현황 제출

1. 물재생시설과-6898(2018.05.24)호와 관련입니다.

2. 2018년 발주대상사업 및 2017년 계약되어 추진중인 시설비 사업 추진현황을 아래와 같이 제출합니다.

ㅇ 추진현황	(기준일 : 2018.5.25)

사 업 명	사업개요	계약내용 (단위:천원)				부진사유 (공정률 50%미만)
		예산액	낙찰가 (낙찰자)	지출액	공정율 (%)
소화조 보수공사	제3처리장 소화조 14지 외부보수공사	1,456,000	( )			실시설계 용역 시행중 (용역기간: 18.3.19 ~ 6.16)
제3처리장 침전지 슬라브 보수공사	제3처리장 침전지 (표면보수 19,916㎡)	1,000,000	( )			정밀안전점검 용역 시행중 (용역기간: 18.5.3 ~ 8.10)
제3처리장 내부 보수공사	제3처리장 침전지 (D계열)	1,770,000	( )			정밀안전진단 및 실시설계 용역 시행중 (용역기간: 18.5.4 ~ 10.30)
정릉천 노후 차집관로 보수공사	정릉천변 차집관로 (비굴착 보수 586M)	300,000	244,046 (강천건설)	98,000	95
소화조보수공사 정밀전검 및 실시설계 용역	제3처리장 소화조 1~14지 외부	30,000	34,705 (동해종합기술공사)	-	60
제3처리장 정밀안전 진단 및 실시결계	제3처리장 침전지 (D계열)	30,000	66,128 (한국건설 품질연구원)	-	30	침전지 운영 시기 조정 에 따라 진행
하수처리시설 정밀점검 용역	센터내 건축, 토목시설물 정기 정밀안전점검	70,000	46,200 (대한산업안전협회)	-	70
센터시설물 내진성능 평가용역	슬러지처리시설, 3,4처리장 침전지	75,900	65,028 (한국국토안전연구원)	-	60
2018토목시설물 유지보수	균열보수180m, ,아스팔트포장6a, 콘크리트포장4a,	200,000	175,105 (동아기업)	-	80
2018건설폐기물 용역	폐아스콘 61㎥, 폐토석 580㎥, 폐콘크리트 510㎥	95,000	90,250 (서울N.E.T.)	-	60

사 업 명	사업개요	계약내용 (단위:천원)				부진사유 (공정률 50%미만)
		예산액	낙찰가 (낙찰자)	지출액	공정율 (%)
소화조(2처리장) 보수공사	단면보수 1,168㎡ 방수 3,037㎡	1,500,000	1,014 (덕우건설(주))	226,188	80
노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)	우수토실 개량 10개소 사각맨홀 교체 3개소 차집관로 세굴보수 100m	500,000	180,199 ((주)성현이앤씨)	-	60
2018년 차집관로 준설공사(연간단가)	- 기계(주간) 1,500㎥ 기계(야간) 1,491㎥	500,000	434,212 (㈜고광건설)	137,762	55
2018년 차집관로 준설토 및 처리용역(연간단가)	준설토 운반 3,415㎥ 준설토 처리 5,225ton	250,000	194,726 (온누리㈜)	-	30	현재 건조 중으로 6월 30일까지 반출예정
우이천외 3개하천 차집관로 정밀점검 용역	우이천 L=1,620m 백운천 L= 420m 대동천 L= 715m 인수천 L=2,130m	30,000	23,570 (㈜뉴타임건설)	-	80
우이천외 5개하천 차집관로 조사용역	자주식 9,747m 부유식 11,420m	160,000	155,180 ((주)한국지중정보)	-	90
도봉천외 4개하천 차집관로 조사용역	자주식 11,604m 부유식 7,934m	150,000	136,950 ((주)한국지중정보)	-	90
소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역	소화조 2,530㎥ 저류조 394㎥	150,000	109,240 ((주)자이언)	-	10	하수처리운영 관계로 7월 시행예정
청계천 좌안 차집관로 물막이공사	□2.8*2.8, 554m □2.4*2.4, 554m	700,000	588,660 (남진공영(주))	-	10	5월발주 사업으로 6월 시행예정
청계천 차집관로 정밀안전진단용역	- □2.1*2.1~2.4*2.4 1,200m	80,000	65,089 (뉴타임건설(주))	-	10	유관기관 업무협의 중으로 6월 시행예정
청계천 차집관로 성능개선공사	단면보수 12,499㎡ 보수보강 1,051㎡	4,500,000	4,095,900 ((주)건림원)	1,277,260	10	정밀안전진단 용역시행 후 시공예정

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	최승룡		시설보수과장	05/31 윤승범
협조자
시행	시설보수과-2820	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개