문서번호	교량안전과-9563
결재일자	2018.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
정성민		손창익	05/31 한유석
협조

프리캐스트슬래브 공장 현장답사 결과보고

(북악스카이웨이1교 개축공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05

안전총괄본부

(교량안전과)

프리캐스트슬래브 공장 현장답사 결과보고

북악스카이웨이1교 개축공사 관련, 프리캐스트 슬래브 생산공장을 현장답사하여 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 출장 개요

○ 일  시 : 2017.5.30.(수) 10:00~ 18:00

○ 장  소 : ㈜비엔지중공업 (전북 정읍시 태임면 태인공단2길 63)

○ 목  적 : 프리캐스트 바닥판 생산시설 보유 여부 등 적격여부 점검

○ 출장자 : 3명

- 강북일반교량팀 정성민, 건설사업관리단 윤영환, 현장소장 안수정

□ 현장점검결과

○ 철근 및 거푸집 조립 → 콘크리트 타설 → 증기 양생 → 적치 등 일련의 제작공정이 강우에 관계없이 가능한 제조시설 보유

- 공장부지면적 29,275㎡, 제조시설면적 3,896㎡

○ 제작 및 운반 소요일 : 약 40일

- 제작물량 : 프리캐스트 바닥판 30EA (9,770mm × 1,980mm)

공장 전경	실내 제조시설

□ 주요 지시사항

○ 조정된 보도폭(1.2→1.5m)에 따른 변경도면 반영 철저

(연석 및 방호벽 설치용 철근 배치 등)

○ 교량 종단경사(S=+5.102%)에 적합하도록 제작 및 설치

○ 루프이음부 무수축몰탈 타설시 누수 및 물고임이 발생하지 않도록 조치 등

□ 조치 계획

○ 하도급 계약체결 후 7월 중순경 “현장운반 및 설치가능”토록 건설사업관리단 및 시공사에서 철저히 공정관리토록 지시.

붙임 : 공장등록증 및 현황 1부.  끝.