투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(소화조 정밀점검 및 실시설계용역(3처리장))

1. 시설보수과-2809(2018.05.30)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 추진중인 『소화조 정밀점검 및 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 소화조 정밀점검 및 실시설계용역(제3처리장)

나. 용역내용 : 제3처리장 소화조 1~14지 외부

다. 용역기간 : 2018.03.19.~2018.06.16

라. 용 역 비 : 34,705,400원

마. 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

바. 변경현황

- 준공기한 연기

• 당초 : 2018.03.19.~2018.06.16.

• 변경 : 2018.03.19.~2018.07.31.

- 연기사유 : 추가 조사에 따른 용역기간 부족

- 지체상금부과 여부 : 미부과

붙임 : 방침서 1부.    끝.

	시설보수과장
주무관	김원선		시설보수과장	05/31 윤승범
협조자
시행	시설보수과-2839	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	대시민공개