위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역(설계변경) 시행 - 계약의뢰

1. 관련근거

가. 용역변경계약서(계약번호 20130*******07호)

나. 교통운영과-8334호(2018. 5.17.)

2. 위 대호와 관련 내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역을 아래와 같이 시행코자 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역

나. 용역기간 : 2013. 9.10. ~2018. 6.10.

다. 계약업체 : ******************

라. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	설계변경			비고
	변경전	변경후	증,감액
계약금액	182,158,000	190,931,000	증8,773,000

마. 설계변경 사유 : 공사물량 증가에 따른 감리비 정산

바. 예산과목 : 세입세출외현금(공공시설손실부담금)

사. 원 인 자 : 서울주택도시공사

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부. 끝.

	교통운영과장
주무관	최성일		신호시설팀장	김창중		교통운영과장	05/31 강진동
협조자	계약2팀장	代김희경
시행	교통운영과-9092	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2483	/전송	02-2133-1053	/		/	부분공개(6)