문서번호	건축부-7553
결재일자	2018.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
조문석		代송옥의	06/01 代이형재
협조	주무관		송옥의
	주무관		서경식

『구 북부법조단지 환경개선공사』

아스팔트 포장깨기 누락 실정보고 승인

2018. 5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『구 북부법조단지 환경개선공사』

아스팔트 포장깨기 누락 실정보고 승인

『구 북부법조단지 환경개선공사』토목공사(철거공사) 관련, 내역 상 아스팔트 포장깨기가 누락되어 있어 이를 반영하고자 보고드림

※ 근거 : 시생박(건설관리) 제 185(’18. 05. 16)호 : 아스팔트 포장깨기 누락 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사

○ 규    모 : 지하 1층 증축, 총사업면적 8,254㎡

○ 공사기간 : ’18.3.~’19.4.

○ 공 사 비 : 53억원

○ 시 공 사 : 지앤지건설㈜

○ 감 리 단 : ㈜경호엔지니어링

□ 책임감리단 실정보고 내용

○ 변경사유

- 설계도면 및 수량산출에 반영되어 있는 아스콘 깨기 면적이 도급 내역상에 누락

- 아스팔트 포장깨기 수량(407.5㎥) 추가

○ 변경내용

구 분	변경 전	변경 후
철거공	-	아스팔트 포장깨기 수량(407.5㎥) 추가

○ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

***	***	**	***	***
*****	*	*****	***********
*******	*	*****	*********
*******	*	*****	*********
*****	*	***	*********
*******	*	*****	*********

※ 단가산정은 낙찰율 적용(86.797%)

□ 검토의견

○ 설계도면, 산출서상 아스콘 깨기 철거공사가 반영 설계 되었으나, 도급내역서상에서 누락

○ 누락에 따른 아스팔트포장깨기 수량(407.5㎥) 추가는 적합하므로 이에 따른 설계변경은 타당하다고 사료됨.

□ 조치의견

○ 책임건설사업감리단로부터 제출된『구 북부법조단지 환경개선공사』“아스팔트포장깨기 누락 실정보고” 승인 통보

○ 향후 설계변경 절차를 거쳐 최종 공사금액을 확정코자 함

************************************************

붙임 : 아스팔트포장깨기 누락 실정보고  1부.  끝.