투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설(신호) 원인자부담공사 공사기간 연장 승인통보(양평동 미소지움아파트 신축공사)

1. 귀 사(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 교통관리과-32311(2017.11.13.)호 및 길조경개발-2018-05-29(2018.05.29.)호와 관련     입니다.

3. 위 호와 관련하여 『교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 연장요청 건』에 대하여     아래와 같이 승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 미소지움아파트 신축공사 중 교통신호기 설치공사

나. 공사장소 : 영등포구 양평동3가 29-1 현장 주변

다. 공사내용 : 경보등 1본 신설 공사

라. 연장사유 : 토목공사 마감정리 미비로 인한 공사기간연장

마. 공사기간 연장승인 내용

구 분	승 인 전	승 인 후	비 고
공사기간	승인통보일 ~ 2018.05.20까지	승인통보일 ~ 2018.7.30까지	60일 증

붙임1. 교통안전시설물 원인자부담공사 연기요청 1부.

2. 공사기간 연장 감리사 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)길조경개발,(주)협우지여엔지니어링,서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울영등포경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장)
주무관	이성도		기전과장	전결 06/01 송장현
협조자
시행	기전과-4698	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)