문서번호	기전과-4733
결재일자	2018.6.2.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		06/02 송장현
협조

『교통안전시설 원인자부담공사[한강공원 나들목 증설공사(개화)]』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사[한강공원 나들목 증설공사(개화)]』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

서울경찰청 교통관리과-7511(2018.03.29.)호

㈜트래픽스 TR-감-180409(2018.05.29.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(개화)

원 인 자 : 한강사업본부

공사장소 : 강서구 방화동 46-2(개화 나들목)

공사내용

- 변경 전 : 경보등 이설 1본

- 변경 후 : 경보등 외날개 2조 1본 철거, 경보등 양날개 4조 1본 신설

교통안전표지 24매(발광형 2매 포함) 신설, 철거 1매, 전원선 지중화

공사기간 : 2016.04.11. ~ 2018.5.31.

공사관련업체

- 감리사 : ㈜트래픽스

- 시공사 : ㈜경태건설

Ⅲ		실정보고 내용

규제 심의 및 도면 변경에 따른 추가 공정 반영되어 물량 변동

기존 전원선(가공선로) 철거 및 전원주 위치 변경(지중화)으로 물량 변동

Ⅳ		변 경 사 유

규제 사항 반영

도로횡단 가공선로를 도로를 횡단하지 않는 전원주로 변경하여 지중화

구 분	변경 전	변경 후	비 고
전원주	가로등 갑	한전 맨홀
가공선로	135m	11m
지중선로	-	40m

Ⅴ		진 행 경 과

날 짜	내 용	시행자	비 고
‘18. 05. 10.	실정보고	감리사	지중화 미반영
‘18. 05. 15.	현장조사	기전과
‘18. 05. 15.	공사관계자 회의	감리, 시공, 기전과	지중화 검토
‘18. 05. 29.	실정보고	감리사	지중화 반영
‘18. 05. 29.	기자재 승인 결과 제출	감리사

Ⅵ		검 토 결 과

현장 실정보고대로 설계변경을 승인 하고자함

Ⅶ		행 정 사 항

감리사 현장 실정보고에 대한 승인 및 유관기관 통보

붙임 1. 실정보고서 1부.

2. 설계도면 1부.

3. 기술검토의견서(기자재). 1부

4. 규제공문 1부.  끝.