투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	별내선 1공구 휴일 작업계획 승인 통보(2018년 06월)

1. 별내 감1-18-213호(2018.5.31), 쌍건별내 제2018-137호(2018.5.31)와 관련입니다.

2.「별내선(8호선연장) 1공구건설공사｣ 와 관련한 2018년 06월 휴일 작업계획(‘18.6.1~6.30)에 대하여 공사계약 일반조건 제5절 6, 서울특별시 공사계약 특수조건 제11조에 따라 아래와 같이 승인하니 공사 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 감리원 휴일 근무 승인 내용

작 업 일	작업 위치	작 업 내 용	관리자
			건설사업관리단	시공사
06월02일 (토)	본선1-2 본선1-3 정거장	본선1-2구간(무복공) 차수그라우팅 천공 및 주입 본선1-3구간 줄파기, H파일 천공 및 항타 정거장구간 굴착 및 가시설	******	****** ****** ****** ******
06월03일 (일)	본선1-2 본선1-3 정거장	본선1-2구간(무복공) 차수그라우팅 천공 및 주입 본선1-3구간 줄파기, H파일 천공 및 항타 정거장구간 굴착 및 가시설	******	****** ****** ****** ****** ****** ******
06월06일 (수) 공휴일	본선1-2 본선1-3 정거장 본선2	본선1-2구간(무복공) 차수그라우팅 천공 및 주입 본선1-3구간 H파일 천공 및 항타 정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 차수그라우팅 천공 및 주입	******	****** ****** ****** ****** ******
06월09일 (토)	본선1-3 정거장 본선2	본선1-3구간 H파일 천공 및 항타 정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 차수그라우팅 천공 및 주입	******	****** ****** ******* ****** ******
06월10일 (일)	본선1-3 정거장 본선2	본선1-3구간 H파일 천공 및 항타 정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 차수그라우팅 천공 및 주입	******	****** ****** ****** ****** ******
06월16일 (토)	정거장 본선2	정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 굴착 및 가시설(Soil Cement)	******	****** ****** ****** ****** ****** ******
06월17일 (일)	정거장 본선2	정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 굴착 및 가시설(Soil Cement)	******	****** ****** ****** ******

06월23일 (토)	본선1-1 정거장 본선2	본선1-1구간 휀스 설치 본선1-1구간 가로등 설치 및 신호등 이설 정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 굴착 및 가시설	******	****** ****** ****** ****** ******
06월24일 (일)	본선1-1 정거장 본선2	본선1-1구간 휀스 설치 본선1-1구간 가로등 설치 및 신호등 이설 정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 굴착 및 가시설	******	****** ****** ******* ****** ******
06월30일 (토)	본선1-1 정거장 본선2	본선1-1구간 휀스 설치 본선1-1구간 가로등 설치 및 신호등 이설 정거장구간 굴착 및 가시설 본선2구간 굴착 및 가시설	******	****** ****** ****** ******

나. 휴일 근무 승인조건 및 업무지시

○ 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자(감리원) 대가는 휴일작업계획의 적정성 여부 검토의견서와 같이 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)에 따라 지급

○ 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

○ 소음 · 비산먼지 발생 · 통행불편 등과 같은 시민불편이 발생하지 않도록 하고 보행자 도우미, 교통 신호수 배치 등 공사장 주변 안전사고 예방에 만전을 기할 것

○ 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

○ 건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리, 비산먼지 발생저감 등 현장관리 철저

○ 건설사업관리기술자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

○ 작업구간 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등 정기순찰 점검실시

○ 휴일 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업 시행토록 할 것

○ 소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 관리철저

○ 개착구간 도로안전시설물 관리 및 교차로, 횡단보도 구간 안전관리 철저

○ 건설기계 및 중량물 취급 작업시 감리 확인 및 안전수칙 준수 철저

○ 휴일작업시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 작업관리 철저

○ 해빙기 및 우기철 풍수대비 점검, 정비와 우기철 유수장애가 일어나지 않도록 현장관리 철저

○ 소음, 진동, 비산먼지 발생 등을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원이 발생하지 않도록 관리철저

○ ‘건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목’ 준수 철저

붙임 : 건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목.  1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	별내선 1공구 건설사업관리단,별내선 1공구 쌍용건설
★주무관	강창묵		신교통1과장	위성환		도시철도사업부장	06/04 박동룡
협조자	주무관	신익현
시행	도시철도사업부-5323	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동96) 프리미어플레이스빌딩 서울시 도시기반시설본부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7178	/전송	02-772-7304	/	gang0211@seoul.go.kr	/	부분공개(6)