문서번호	도시철도사업부-5343
결재일자	2018.6.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	신교통1과장	도시철도사업부장
강창묵	위성환	06/04 박동룡
협 조	신교통2과장		성원배
	주무관		김동일
	주무관		박노성
	주무관		서현준
	주무관		왕태현
	주무관		신익현

별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사

주간공정회의 개최 결과 보고(5월5주)

2018. 6.

도시기반시설본부

도시철도사업부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 별내선(8호선연장)1,2공구 건설공사 -
주간공정회의 개최 결과 보고(5월5주)

별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사의 원활한 공사추진 및 적정 공정관리를 위한 주간공정회의(5월 5주)개최 결과를 보고드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘18.05.29.(화) 14:00~15:00

○ 장    소 : 도시철도사업부 회의실

○ 참 석 자 : 11명

- 본  부 : 도시철도사업부장, 신교통1과장, 신교통2과장, 담당주무관4명

- 현  장 : 1,2공구 책임건설사업관리기술자, 1,2공구 현장소장

□ 추진현황 보고

○ 보 고 자 : 1,2공구 책임건설사업관리기술자

○ 보고내용

- 파일 천공 및 근입 시공, 복공판 설치 현황(1공구)

- 복공판 설치(1공구)

- 환기구 1번 관로보호공 줄파기 및 흙깍기 현황(2공구)

- 환기구 1번 지중연속벽 굴착 및 콘크리트타설 현황(2공구)

□ 공정회의 결과

○ 파일 공사 및 수직구 공사 적정 추진 중 (완료/계획)

- 본선 1-2구간 파일천공 및 근입(185본 완료)

- BN1 정거장 구간 파일천공 및 근입(236본 1단계 좌측․중앙 완료)

- 본선 2 구간 사토처리(1,944/16,840㎥) 및 복공판 설치(860/1,133㎡)

- 환기구 1번 관로보호공 줄파기(83m완료), 흙깍기(2,800㎡/23,345㎡)

- 환기구 2번 지중연속벽 굴착 및 콘크리트타설(482/2,293㎥)

□ 주요 토의내용

○ 도시철도사업부장

- 공사가 본격적 추진으로 장비, 인원 투입이 많아져 안전관리가 중요하고  안전어사대 출범이 있어 현장 안전관리를 철저히 하여 주길 당부

- 하절기 우기철 도래 수해대비 점검 및 배수로 등 정비 당부

- 환기구 1번 우기시 대비 사면정비 및 암사정수장 측으로 토사가 범람되지 않도록 배수로, 다이크 등 정비 관리 당부

- 1차 준공 처리 및 2차 공사 발주계획 수립에 철저 할 것.

- 설계도서 검토 사항 관련부서 협의 및 자문회의 절차거쳐 처리

○ 신교통1과장

- 공사추진에 차질이 없도록 현장에서는 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

○ 신교통2과장

- 효율적인 공정관리를 위해 One-PMIS 공정률을 현장에서 관리하는 공정과 일치되도록 조치하시기 바람.

○ 책임건설사업관리기술자/현장소장

- 공정관리, 품질확보, 안전시공을 최우선 목표로 공사추진에 차질이 없도록 공사관리에 만전을 기하겠음.

□ 향후계획

○ 차기 공정회의시 금회 공정회의 요구사항 조치결과 보고

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 공정회의 사진 1부.

3. 공정추진현황 1부.  끝.