투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 시행(2017년 도로교통소통 개선사업 교통신호기 공사-장충체육관 앞)

1. “기전과-5119(2018. 6. 4.)호”와 관련된 내용입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인 “2017년 도로교통소통 개선사업 교통신호기 공사(장충체육관 앞)”의 공사물량 증감으로 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 도로교통소통 개선사업 교통신호기 공사(장충체육관 앞)

나. 도 급 자 : ㈜비엔에스

다. 변경사유 : 기존관로 사용, 통합지주 신설 및 이설 등으로 인한 물량 변경

라. 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		변경전	변경후	증·감
총공사비		110,743,910	100,530,000	감 10,213,910
도급비	공급가액	100,676,282	91,390,910	감 9,285,372
	부가가치세	10,067,628	9,139,090	감 928,538
	계	110,743,910	100,530,000	감 10,213,910

마.예산과목 : 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통 개선, 시설비(사고이월)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 설계변경 전후 도면1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김성균		기전과장	전결 06/04 代윤석주
협조자	주무관	정동현		관리단속과장	안근
시행	기전과-5138	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개