투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사 책임건설사업관리기술자 여선모 귀하
(경유)
제목	“디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사”조경공사 실정보고 승인통보

1. 디지털3지하차도 *******2(2018.05.23.)호와 관련입니다.

2. “디저털3단지~두산길간 지하차도 건설공사” 시행중 공사부지내 금천구청과 지장수목 처리(이식, 제거) 협의 사항을 공사에 반영한 실정보고 사항에 대하여 승인 통보합니다.

3. 책임건설사업관리자는 안전관리에 유의하여 시공하여 주시고, 추후 설계변경에 정산•반영하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 수목운반(B33~37) 상하차 시간 중복되어 삭제후 설계변경에 반영하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 실정보고사항 검토보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	06/05 이임섭
협조자
시행	방재시설부-7221	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 플리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/		/	부분공개(5)