문서번호	조경지원과-1718
결재일자	2018.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경소재팀장	조경지원과장
신보식	代박선재	06/05 김제중
협 조
	공원운영과장		오철선

2018년 보라매공원

생육환경 개선사업 추진계획

2018.  6.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 보라매공원

생육환경 개선사업 추진계획

보라매 공원 내 수목의 원활한 생장을 위한 생육환경을 개선하여  공원을 이용하는 시민들에게 만족도 높은 공원 품질을 제공하고자 함

1		대상지 현황

위    치 : 동작구 여의대방로 20길 33

공원면적 : 413,352㎡

주요시설 : 잔디광장, 에어파트, 농촌체험장 음악/바닥분수 등

개 원 일 : 1986. 5. 5

2		기 본 방 향

공원 내 수목의 원활한 생육을 위하여 토양개량, 생리증진처리, 영양제주사 및 고사지 제거 등을 시행하여 공원내 건강한 수목생육환경 조성

3		사 업 개 요

대 상 지 : 보라매공원 내

사업기간 : 2018. 6. ~ 7.

사업내역

❍ 토양개량 약 44㎡, 유공관설치 71개소, 생리증진제처리 38㎏,

영양제수간주사 44병, 뿌리발근제 토양관주 5.7병, 고사지 제거 6주

집행방법 : 수의계약

소요예산 : 15,000천원

예산과목 : 공원녹지정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 시 공원 유지관리 및 보수 정비*도시개발특별회계)(205-401-01)

4		추 진 일 정

2018.  6. 05. ~ 15. : 자체설계 및 수의계약

2018.  6. 18. : 공사착공

2018.  7. 16. : 공사완료

붙 임 : 위치도 1부

(붙임)

위  치  도

■ 사업대상지 위치도