문서번호	시설보수과-1320
결재일자	2018.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
이호복		김일운	06/05 정흥순
협조	주무관		김광모
	주무관		윤종현

방류펌프장 배전반 설치 계획

2018. 06.

난 지 물 재 생 센 터

[시설보수과]

방류펌프장 배전반 설치 계획

방류펌프장 고압 수중펌프 설치와 관련하여 전력공급 및 기동에

필요한 배전반을 아래와 같이 신설하고자 함

Ⅰ		추진배경

❍ ’18년 제2차 재난관리기금운용심의위원회 심의결과 및 예산

재배정 통보(하천관리과-3404, ’18.3.4)

- 방류동 엔진펌프 정비(3대) 및 신설(1대)

Ⅱ		설비현황

❍ 엔진펌프 : 총 3대

위 치	수량	동력 (kw)	용 량	설치 년도	제 작 사
방 류 펌프장	3	647	엔진구동 입축사류펌프 φ1,500 × 370㎥/h × 7mH	1991	STX엔진

❍ 엔진펌프 설치 사진

사진1	사진 2	사진 3

Ⅲ		추진방향

❍ 방류동 펌프신설 예산은 500백만원으로 배전반 등 기동에 필요한

전기설비 구축예산 부족

❍ 배전반 신설에 따른 예산 확보 방안

- #1최초침전지 슬러지수집기 교체 및 수배전반 교체 사업의

집행잔액을 활용하여 사업 추진

(단위 : 백만원)

건 명	예산액	계약금액	집행잔액
계	1,310	1,089	221
#1최초침전지 슬러지수집기 교체	1,010	862	148
수배전반 교체	300	227	73

- 자본적지출.유형자산취득,기계장치,시설비및부대비(시설비)

❍ 배전반 설치물량 및 규격

- VCB반 2면, 고압기동반 1면, 콘덴서반 1면, 분전반 1면 설치

- 전선관 배선 및 전력케이블 포설, 기타 부대시설 공사 1식

품 명	규 격	수량 (면)	설치위치	비 고
VCB반	800W×2350H×2000D	1	주변전실	교체
VCB반	800W×2350H×2000D	1	방류펌프장	신설
고압기동반	900W×2350H×2000D	1		신설
콘덴서반	900W×2350H×2000D	1		신설
분전반	650W×1500H×300D	1		신설

Ⅳ		사업개요

❍ 사 업 명 : 방류펌프장 배전반 제작구매 설치

❍ 추정 소요예산 : 195백만원(조달수수료 포함)

❍ 사업기간 : ’18. 7 ∼ 9

❍ 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

❍ 기대효과 : 방류동 예비기 확보로 가동능력 증대 및 재난사고 예방

※ 수중펌프 설치 사업과 연계하여 사업일정 조정 시행

Ⅴ		향후일정

❍  ’18. 6 : 기초자료 조사, 설계도서 작성

❍  ’18. 6 : 발주 · 계약

❍  ’18. 7∼9 : 제작설치· 시운전 · 준공

Ⅵ		행정사항

❍ 조달구매(제3자단가)로 계약심사, 일상감사, 특정제품선정심사 제외

❍ 집행잔액 활용을 위한 사업 및 예산관련 담당자 업무 협의. 끝.