투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	계약변경_2018 한강공원 난지캠핑장 보수 ‧ 정비공사 실시설계 용역

1. 공원기획과-1702(2018.06.04.)호와 관련입니다.

2. ｢ 2018 한강공원 난지캠핑장 보수․정비공사 실시설계 용역｣ 계약기간 연장 요청에 대하여          아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 계약건명 : 2018 한강공원 난지캠핑장 보수․정비공사 실시설계 용역 계약기간 연장

나. 변경내용 : 용역기간 연장

- 당 초 : 2018. 4. 10. ~  2018. 6.  8.

- 변 경 : 2018. 4. 10. ~  2018. 7. 31.

다. 변경사유

-“난지캠핑장 종합개선계획 수립”용역과 연계‧검토 하기 위하여 용역기간 연장 필요

붙  임 : 계약관련 서류 일체 각1부.  끝.

주무관	안희정		총무과장	06/05 박병현
협조자
시행	총무과-7570	(		)	접수		(		)
우	04770	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0719	/전송		/		/	부분공개(7)